9

주요 투자사업 추진현황

9-1. 투자심사 대상사업

우리 구에서 ‘15년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	2014년까지 집행사업비	2015년 소요사업비	2016년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률(%)
대불호텔 터 활용사업	2,899	310	140	2,445	2016	2015	30
춤추는 소무의도 조성사업	2,500	-	300	2,200	2018	2015	5.3
복합문화공간 건립	29.9	18	1.9	10	2016	2015	40
영종미개발지역 소1-3(4구간) 도로개설공사	4,800	-	200	4,600	2017	2015	10
영종미개발지역 소1-4호선(1차) 도로개설공사	9,600	-	200	9,400	2017	2015	10

‣ (대상사업) 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 2015년에 추진한 사업

9-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

사업명

대불호텔 터 활용사업

담당자

문화예술과 김연희(☎760-6473)

□ 사업목적 및 필요성

○ 역사적 가치가 있는 대불호텔의 외형을 복원하고 내부는 전시관 등 문화       시설로 조성하여 개항기 역사체험의 장으로 활용

○ 한국 최초의 서구식 호텔인 ‘대불호텔’의 역사성과 상징성을 인천개항장       문화지구의 유력한 문화관광자원으로 적극 활용

□ 사업개요

○ 기 간 :  2013. 6 ~ 2017. 상반기

○ 위 치 :  중앙동 1가 18번지

○ 규 모 :  지상 3층, 연면적 682.95㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,899백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	2,899	310	140	2,445	-
시군구비	2,899	310	140	2,445	-

□ 추진상황(건축공사 시행 중 :  30 %)

○ 2013.  6  : 대불호텔 터 보존 및 활용계획 수립

○ 2013.  9  : 유적부지 기증에 따른 소유권 이전

○ 2014.  4  : 기본계획 수립 용역 준공

○ 2015. 12  : 실시설계 완료

□ 향후계획

○ 2016.  4  : 건축공사 착수

○ 2016.  9  : 전시공사 착수

○ 2017.  1  : 건축공사 완료

○ 2017. 상반기 : 전시공사 완료

□ 사업변경 내역

○ 사업기간 : (당초)‘13 ~ ’15 (변경)‘13 ~ ’17 ※문화재 현상변경 협의 지연

사업명

춤추는 소무의도 조성사업

담당자

관광진흥실 조영세 (☎760-6485)

□ 사업목적 및 필요성

○ 소무의도 해양자원과 유휴공간을 활용해 관광자원으로 개발하고 주민 역량강화를 통해 신규 수익사업을 발굴하여 자생력 있는 관광어촌마을로 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015년 ~ 2018년

○ 위 치 : 인천 중구 무의동 소무의로 998-12번지 일원 (무의 12통)

○ 규 모 : 건어물가공판매장, 마을레스토랑 등 조성

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	2,500	-	300	106	2,094
국 비	2,000	-	240	85	1,675
시 도 비	150	-	30	6	114
시군구비	350	-	30	15	305

□ 추진상황 (추진단계 및 진도 : 5.3%)

○ 2015.  3.  2 : 춤추는 소무의도 조성사업 종합계획 수립 용역 착수

○ 2015. 10. 29 : 지역역량강화 및 컨설팅사업 착수

○ 2015. 12. 23 : 콘텐츠 및 브랜드 개발사업 착수

○ 2015. 12. 24 : 춤추는 소무의도 조성사업 종합계획 수립 용역 완료

□ 향후계획

○ 2016년 : 주민역량강화사업, 콘텐츠 개발 사업 등 용역 추진

○ 2017년 : 바다시장 및 갯벌종합체험장 시범사업 추진

○ 2018년 : 건어물가공판매장 및 마을레스토랑 등 사업 추진

사업명

복합문화공간 건립

담당자

관광진흥실 김정용(☎760-6497)

□ 사업목적 및 필요성

○ 중앙동 1가 17번지상 구유 근대건축물의 활용도를 제고하기 위해 개항박물관의       분관으로 근․현대 생활사전시관 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014년 1월 ~ 2016년 12월

○ 위 치 : 인천광역시 중구 신포로23번길 97

○ 규 모 : 지상2층/ 연면적 733.36㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 29.9백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	29.9	18	1.9	10	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	29.9	18	1.9	10
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 2014.  1. 23 : 소유권 이전 완료

○ 2016.  1.  7 : 건축공사 착공

□ 향후계획

○ 2016.  8 : 건축공사 준공

○ 2016.  9 : 전시공사 착공

○ 2016. 12 : 전시공사 준공

사업명

영종미개발지역 소1-3호선(4구간)

도로개설공사

담당자

영종개발과 김유민(☎760-8853)

□ 사업목적 및 필요성

○ 영종도 내 경제자유구역에서 해제 된 개발계획 미수립 지역이 장기간 기반시설 부족으로 지역주민의 고충이 가중되고 있는 실정으로

○ 도로를 개설하여 통행 편의를 확보함은 물론 상․하수도 및 도시가스 등 생활 편의시설 설치여건 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014. 11. ~ 2017. 12.

○ 위 치 : 중산동 256-16 ~ 중산동 1265-3

○ 규 모 : 도로개설 L = 904m, B= 11.5m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	4,800		200	3,850	750
지 방 채	2,400	-	-	2,400	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,400	-	200	1,450	750
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2014. 11 : 지방재정투자사업 심의

○ 2015.  8 : 지방재정투자사업 재심사(지방채 발행)

○ 2016.  3 : 실시계획 인가

○ 2016.  6 : 공사 착공

□ 향후계획

○ 2017.  6 : 공사 준공

사업명

영종미개발지역 소1-4호선(1차)

도로개설공사

담당자

영종개발과 김유민(☎760-8853)

□ 사업목적 및 필요성

○ 영종도 내 경제자유구역에서 해제 된 개발계획 미수립 지역이 장기간 기반시설 부족으로 지역주민의 고충이 가중되고 있는 실정으로

○ 도로를 개설하여 통행 편의를 확보함은 물론 상․하수도 및 도시가스 등 생활 편의시설 설치여건 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014. 11. ~ 2017. 12.

○ 위 치 : 운북동 30-132 ~ 중산동 1014-8

○ 규 모 : 도로개설 L = 1,800m, B= 11.5m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	9,600	-	200	6,106	3,294
지 방 채	4,800	-	-	4,800	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	1,000	-	-	1,000	-
시군구비	3,500	-	200	6	3,294
기 타	300	-		300

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2014. 11. : 지방재정투자사업 심의

○ 2015.  8. : 지방재정투자사업 재심사(지방채 발행)

○ 2016.  6. : 실시계획 인가

□ 향후계획

○ 2016. 10. : 공사 착공

○ 2017. 10. : 공사 준공

9-2. 지방채 발행사업

우리 구에서 ‘15년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총 사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타
가칭)영종1동 주민센터 신축	4,524	1,000	-	-	3,524	-	1,000	3
영종미개발지역 소2-5호선 도로개설공사	8,200	1,100	-	2,600	4,000	500	1,100	90

▸ 대상사업 : 지방채 발행사업 중 2015년에 추진한 사업

※ 시도비 및 시군구비는 지방채 제외

※ 총사업비 = 지방채+국비+시도비+시군구비+기타

개별 지방채 발행사업 추진현황

사업명

가칭)영종1동 주민센터 신축

담당자

총무과 한형정(☎760-7162)

□ 사업목적 및 필요성

○ 영종하늘도시 조성으로 인구가 증가함에 따라 청사를 신축하여 주민복지 및       환경정비 등 행정수요에 대비하고 주민생활 만족도 제고

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014. 1 ~ 2017. 2

○ 위 치 : 중산동 1878-9

○ 규 모 : 지하1층/지상5층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,524백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	4,524	804	3,720	-	-
지 방 채	1,000		1,000	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	3,524	804	2,720	-	-
기 타	-	-	-	-	-

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 3%)

○ 2014. 2. 13 ~ 6. 24 : 기본 및 실시설계 용역 실시

○ 2015. 11. 7        : 공사 착공

□ 향후계획

○ 2017. 2 : 가칭)영종1동 주민센터 준공

사업명

영종 미개발지역 소2-5호선

도로개설공사

담당자

영종개발과 김유민(☎760-8853)

□ 사업목적 및 필요성

○ 영종도 내 경제자유구역에서 해제 된 개발계획 미수립 지역이 장기간 기반시설 부족으로 지역주민의 고충이 가중되고 있는 실정으로

○ 도로를 개설하여 통행 편의를 확보함은 물론 상․하수도 및 도시가스 등 생활 편의시설 설치여건 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2011. 11. ~ 2016. 12.

○ 위 치 : 중산동 1850-139 ~ 중산동 1265-1

○ 규 모 : 도로개설 L = 2,264m, B= 6 ~ 11.5m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	8,200	6,101	2,099	-	-
지 방 채	1,100	-	1,100	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	2,600	2,600	-	-	-
시군구비	4,000	3,501	499	-	-
기 타	500	-	500	-	-

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○ 2011. 11. : 지방재정투자사업 심의

○ 2013.  7. : 실시계획 인가

○ 2014.  3. : 공사 착공

○ 2015. 11. : 공사 준공

□ 향후계획

○ 2016. 12. : 잔여공사 시행 및 공사완료 공고

9-3. 민간투자사업

우리 구에서 ‘15년에 추진한 민간투자사업은 없습니다.