◈ 특수공시 목록 ◈

연번	사 업 명	부 서	비 고
1	동화마을 휴게쉼터(트릭아트스토리) 조성사업	관광진흥실
2	인천개항장 근대역사체험관 조성사업	관광진흥실
3	운북동 1256번지 일원 배수로정비공사	영종개발과
4	중산교차로~돌팍재 삼거리 간 도로정비공사	영종개발과
5	영종 미개발지역 소2-5호선 도로개설공사	영종개발과
6	운북동 벌판마을 진입도로 개설공사	영종개발과
7	배수문 정비공사	영종개발과
8	용동 공영주차장 조성공사	교통행정과
9	월미도 공영주차장 조성공사	교통행정과
10	쌈지 공영주차장 조성공사	교통행정과

1

동화마을 휴게쉼터(트릭아트스토리) 조성사업

송월동 동화마을을 특색있는 관광지로 육성하기 위한 편익시설과 볼거리를 제공함으로써 지역경제 활성화에 기여하고자 함

사업개요

○ 사업기간 : 2013. 10월 ~ 2015. 4월

○ 위    치 : 중구 자유공원서로 45번길 25 (송월동3가 14-2)

○ 규    모 : 지상2층 (연면적 : 500㎡)

○ 총사업비 : 1,869백만원

○ 사업내용 : 트릭아트 전시관 조성

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분 재원별	총사업비	2013년 이전	2014년	2015년 이후
계	1,869	-	1,869	-
국고보조금	-	-	-	-
시비보조금	-	-	-	-
자 체 재 원	1,869	-	1,869	-

추진실적

○ 2013. 10월 : 사업계획 수립

○ 2014.  1월 : 토지매입 완료

○ 2014. 12월 : 공사 착공

○ 2015.  6월 : 공사 준공

기대효과

○ 체험관광 및 관광편의 제공을 통한 관광여건 개선

관련사진

▶ 위치도

▶ 준공사진

2

인천개항장 근대역사체험관 조성사업

2012년 관광특구 활성화 국비 공모사업으로 진행 중인 「월미관광특구 활성화사업」의 일환으로, 전시․문화공간 확충 및 관광트렌드 변화에 부응하여 관광객이 직접 체험할 수 있는 체험형 관광자원으로 개발하여 월미관광특구 활성화에 기여하고자 함

사업개요

○ 사업기간 : 2012. 2월 ~ 2015. 4월

○ 위    치 : 중구 한중문화관 지상 주차장 부지 (항동1가 1-16)

○ 규    모 : 지상2층 (연면적 719.98㎡)

○ 총사업비 : 2,500백만원

○ 사업내용 : 근대개항장 기획전시실, 화교역사관, 3D 가상현실관 조성 등

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분 재원별	총사업비	2013년 이전	2014년	2015년 이후
계	2,500	2,500	-	-
국고보조금	800	800	-	-
시비보조금	400	400	-	-
자 체 재 원	1,300	1,300	-	-

추진실적

○ 2014. 1월 : 실시설계용역 착수

○ 2014. 6월 : 실시설계용역 완료

○ 2014. 9월 : 공사 착공

○ 2015. 4월 : 공사 준공

기대효과

○ 관광객이 직접 체험할 수 있는 체험형 관광자원 개발로 관광특구 활성화에 기여

관련사진

▶ 위치도

▶ 준공사진

3

운북동 1256번지 일원  배수로정비공사

운북동 1256번지 일원 배수로를 개선하여 주거지역의 배수로 오염으로 인한  악취 발생을 저감시켜 지역주민의 생활환경 개선과 우기 시 수해예방 및 주민생활불편을 최소화하기 위하여 아래와 같이 배수로 정비공사를 시행함.

사업개요

○ 사업기간 : 2015. 3월 ~ 2015. 6월

○ 위    치 : 운북동 1256번지 일원

○ 규    모 : 수로암거, U형개거, 종배수관 설치

○ 총사업비 : 350백만원

○ 사업내용 :

- 수로암거 : 1@2.0x1.7 L=48.4m  1@3.0x2.0 L=5.4m

- U형개거 :  3.0x2.0 L=176m, 3.0x1.5 L=13.6m, 2.0x1.5 L=48.0m, 1.5x1.0 L=98.5m

- 종배수관 : D600mm L=10m(2개소)

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분 재원별	총사업비	2013년 이전	2014년	2015년 이후
계	350	-	-	350
국고보조금	-	-	-	-
시비보조금	-	-	-	-
자 체 재 원	350	-	-	350

추진실적

○ 2015. 3. 11 : 공사 착공

○ 2015. 5. 22 : 물량증감에 따른 설계변경

○ 2015. 6.  8 : 공사 준공

기대효과

○ 배수불량으로 인한 인근 주민 피해 최소화

○ 우기 시 침수피해 예방

관련사진

자연대로

동

강

천

▶ 위치도

동

강

천

자연대로

▶ 준공사진

4

중산교차로 ~ 돌팍재 삼거리 간 보도정비공사

영종도의 대표적인 주민밀집지역인 운중로의 노후된 보도를 정비하여 쾌적한 가로환경을 조성하기 위해 시행 함.

사업개요

○ 사업기간 : 2015. 6월 ~ 9월

○ 위    치 : 중구 운중로(중산교차로~돌팍재삼거리) 일원

○ 규    모 : 노후 인도 정비 L=700m, B=1.6m, 양방향

○ 총사업비 : 320백만원(2015년 발절소주변지역 지원사업 특별지원금)

○ 사업내용

- 보도블록 포장  A=1,937㎡

- 콘크리트 포장  A=127㎥

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분 재원별	총사업비	2013년 이전	2014년	2015년 이후
계	320	-	-	320
국고보조금	320	-	-	320
시비보조금	-	-	-	-
자 체 재 원	-	-	-	-

추진실적

○ 2015. 6. 16 : 공사 착공

○ 2015. 5. 22 : 물량증감에 따른 설계변경

○ 2015. 9. 13 : 공사 준공

기대효과

○ 노후된 보도를 정비하여 낙후된 도시 이미지 탈피하고 쾌적한 가로환경 조성

관련사진

돌팍재삼거리

▶ 위치도

▶ 준공사진

5

영종 미개발지역 소2-5호선 도로개설공사

영종 미개발지 내 미집행 도시계획도로를 개설하여 열악한 교통환경을 개선하고 생활기반시설을 확충함으로써 구민 삶의 질을 향상하기 위하여 시행함.

사업개요

○ 사업기간 : 2012. 1월 ~ 2015. 11월

○ 위    치 : 중산동 1850-139번지 ~ 중산동1265-1번지

○ 규    모 : 도로개설 L=2,264m, B=6.0~8.0m

○ 총사업비 : 8,200백만원

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분 재원별	총사업비	2013년 이전	2014년	2015년 이후
계	8,200	6,101	-	2,099
국고보조금	-	-	-	-
시비보조금	2,600	2,600	-	-
자 체 재 원	5,600	3,501	-	2,099

추진실적

○ 2013.  7.  1 : 실시계획 인가 고시

○ 2014.  3. 27 : 공사 착공

○ 2015.  5. 11 : 실시계획 변경 인가 고시

○ 2015. 11. 26 : 공사 준공

기대효과

○ 도로개설을 통한 원활한 교통흐름 확보와 가로환경 개선

○ 생활기반시설 확충으로 인한 지역 발전 효과

관련사진

▶ 위치도

▶ 준공사진

6

운북동 벌판마을 진입도로 개설공사

운북동 486-5번지 일원 벌판마을은 진입하는 도로의 폭이 협소하고 도로의   구조적인 문제점으로 인하여 자연대로와 벌판마을을 연결하는 도로 설치를  주민들이 요구함에 따라, 쾌적하고 안전한 교통환경 조성에 만전을 기하기 위해 시행함.

사업개요

○ 사업기간 :  2015. 12월

○ 위    치 : 금산IC교차로 ~ 운북동 벌판마을

○ 규    모 : 도로개설  L=105.0m, B=8.0m

○ 총사업비 : 322백만원

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분 재원별	총사업비	2013년 이전	2014년	2015년 이후
계	322	-	22	300
국고보조금	-	-	-	-
시비보조금	-	-	-	-
자 체 재 원	322	-	22	300

추진실적

○ 2014.  1. 29 : 실시설계용역 착수

○ 2015.  7. 24 : 실시설계용역 준공

○ 2015.  9.  1 : 공사 착공

○ 2015. 12.  3 : 공사 준공

기대효과

○ 운북동 금산IC일원 벌판마을은 ‘자연대로’의 개설로 기존 도로가 단절되어

마을로의 접근이 매우 불편한 실정이었으나, 마을 진입도로 개설로 인하여

지역 주민의 통행권을 확보함.

관련사진

▶ 위치도

▶ 준공사진

7

영종 배수문 정비공사

영종 내 농경지 및 양어장에 안정적으로 용수를 제공하고 배수문의 취약부를 보강하여 침수 등의 자연재해를 예방하기 위한 『영종 배수문정비공사』를 다음과 같이 시행

사업개요

○ 사업기간 : 2015. 8. 1. ~ 2016. 7. 8.

○ 위    치 : 중산동 일원

○ 규    모 : 배수문 4개소 암거 신설 및 수문교체

○ 총사업비 : 460백만원

○ 사업내용 :

– 논골 레저타운 방조제 배수문

․문비 및 문틀(1.5*1.5) 2개소, 암거확장(1.2*1.2) = 1.4m

– 마당개 초소옆 배수문

․문비 및 문틀(2.0*1.6) 2개소

– 월촌 양어장 배수문

․문비 및 문틀(2.0*2.0) 2개소, 암거신설 = 15.7m

– 동강천 논골 배수갑문

․문비 및 문틀(2.0*2.0) 2개소, 암거신설 = 15.7m

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분 재원별	총사업비	2013년 이전	2014년	2015년 이후
계	460	-	-	460
국고보조금	-	-	-	-
시비보조금	-	-	-	-
자 체 재 원	460	-	-	460

추진실적

○ 2015. 9. 24 ~ 11. 14 : 설계용역 실시

○ 2016. 3. 11 : 영종 배수문 정비공사 착공

○ 2016. 6. 29 : 공사 준공

기대효과

○ 인근 농경지 및 양어장에 안정적 용수제공

○ 우기 시 침수피해 예방

관련사진

▶ 위치도

월촌방조제

마당개 초소옆 방조제

논골레저 방조제

동강천배수갑문

▶ 준공사진

8

용동 공영주차장 조성 공사

주차수요 다발지역인 상가 밀집지역에 공영주차장을 조성하여 주차난을 해소하고 쾌적한 상업지구 환경 조성

사업개요

○ 사업기간 : 2013. 2월 ~ 2015. 9월

○ 위    치 : 용동 177-12번지 외 10필지

○ 규    모 : 1,127.4㎡지평식(27면)

○ 총사업비 : 총 3,888백만원

○ 사업내용 : 주차장 조성을 위한 보상 및 공사시행

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분 재원별	총사업비	2013년 이전	2014년	2015년 이후
계	3,888	3,208	680	-
국고보조금	-	-	-	-
시비보조금	592	592	-	-
자 체 재 원	3,296	2,616	680	-

추진실적

○ 2013.  2. 21 : 용동 공영주차장 조성계획 수립

○ 2013. 10.  1 : 보상계획 수립 및 공고

○ 2014. 12월   : 보상 완료

○ 2015.  9월   : 공사 준공

기대효과

○ 고질적 주차 문제 해결을 통한 지역경제 활성화 기여

관련사진

▶ 위치도

▶ 준공사진

9

월미도 공영주차장 조성 공사

주차수요 다발지역인 상가 및 관광 지역에 공영주차장을 조성하여 주차난을 해소하고 중구를 방문하는 관광객 민원 감소에 기여

사업개요

○ 사업기간 : 2014. 12월 ~ 2015. 5월

○ 위    치 : 북성동1가 97-16번지 일원

○ 규    모 : A=2,370㎡

○ 총사업비 : 2,758백만원

○ 사업내용 : 주차장 조성을 위한 보상 및 공사시행

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분 재원별	총사업비	2013년 이전	2014년	2015년 이후
계	2,758	-	2,281	477
국고보조금	-	-	-	-
시비보조금	-	-	-	-
자 체 재 원	2,758	-	2,281	477

추진실적

○ 2013.  8. 12 : 지구단위계획 (변경)결정(내용 : 주차장 위치 변경)

○ 2014. 12. 23 : 월미도 공영주차장 조성공사 보상계획 수립

○ 2015.  2. 25 : 감정평가 및 지적측량 완료

○ 2015.  3.  2 : 보상에 대한 협의 요청(구→(주)선광)

○ 2015.  5 ~ 9 : 주차장 조성공사 착공 및 준공

기대효과

○ 관광객들을 위한 주차 편의시설을 제공하여 지역경제 활성화에 기여

관련사진

▶ 위치도

▶ 준공사진

10

쌈지 공영주차장 조성 공사

주차수요 다발지역인 주택가에 공영주차장을 조성하여 주차난을 해소하고 주거환경 개선

사업개요

○ 사업기간 : 2015. 7월 ~ 2015. 12월

○ 위    치 : 율목동 90-6번지 일원

○ 규    모 : A=80㎡

○ 총사업비 : 169백만원

○ 사업내용 : 주차장 조성을 위한 보상 및 공사시행

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분 재원별	총사업비	2013년 이전	2014년	2015년 이후
계	169	-	-	169
국고보조금	-	-	-	-
시비보조금	-	-	-	-
자 체 재 원	169	-	-	169

추진실적

○ 2015.  3. 26 : 2015년 쌈지 공영주차장 조성계획 수립

○ 2015. 10. 16 : 보상완료

○ 2015. 10. 27 : 공사계약

○ 2015. 10. 30 : 공사착공

○ 2015. 11. 23 : 공사준공

기대효과

○ 주택가에 공영주차장을 조성하여 주차난을 해소하고 주거환경 개선

관련사진

▶ 위치도

▶ 준공사진