◈ 특수공시 목록 ◈

연번	사 업 명	부 서	비고
1	영종역사관 건립	문화예술과
2	차이나타운 보행환경개선사업	건설과
3	신포국제시장 일원 기반시설 정비공사	건설과
4	사동삼거리 일원 인도정비공사	건설과
5	신흥동 하나님의 교회 일원 인도정비공사	건설과
6	연안동 일원 경관조명설치 공사	건설과
7	연안부두 여객터미널 일원 노후하수관 정비공사	건설과
8	만국 야생화정원 조성사업	도시개발과
9	소하천(동강천 1단계-1구간) 정비공사	기반시설과
10	영종도 하수도 폐기물 적환장 설치공사	기반시설과
11	가족형 생태물놀이장 조성사업	도시공원과
12	선녀바위 쉼터 및 화장실 설치사업	도시공원과

1

영종역사관 건립

영종의 유적과 유물 수집․전시를 통해 급속히 변하는 영종의 역사와 문화를 보존하고 계승 ․ 발전시켜 지역주민들에게 문화향유의 기회 제공

사업개요

○ 사업기간 : 2012년 ~ 2017년

○ 위    치 : 구읍로 63(중산동)

○ 규    모 : 부지면적 5,000㎡, 연면적 2,936.12㎡ (지하1층, 지상3층)

○ 총사업비 : 10,618백만원(구비 6,118 / 민자 4,500)

○ 사업내용 : 영종역사관 건립, 전시물 제작·설치, 전시유물 확보 등

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분 재원별	총사업비	2015년 이전	2016년	2017년	2017년 이후
계	10,618	2,493	3,011	4,605	509
국고보조금	-	-	-	-	-
시비보조금	-	-	-	-	-
자체재원	10,618	2,493	3,011	4,605	509
지방채	-	-	-	-	-

추진실적

○ 2012.  2.  8 : 영종역사관 건립 기본계획(안) 수립

○ 2012. 12.  7 : 영종역사관 건립에 관한 협약 체결(區, LH, 인천도시공사)

○ 2015.  5. 29 : 건축공사 착공

○ 2015. 10.  1 : 전시공사 착공

○ 2017.  1. 24 : 건축공사 준공

○ 2017. 10. 16 : 영종역사관팀 신설

○ 2017. 12.  7 : 제1종 전문박물관 등록

○ 2017. 12. 11 : 전시공사 준공

○ 2017. 12. 22 : 영종역사관 포토존 사인물 및 야외 쉼터(사색의 언덕) 조성

○ 2018.  3. 23 : 국가귀속문화재(영종지역 출토 유물) 대여 및 전시

○ 2018.  4. 12 : 영종역사관 개관

기대효과

○ 각종 개발로 멸실된 지역의 유적과 유물의 수집 ․ 전시를 통하여 급속히 변하고 있는 영종의 역사와 문화를 재조명

○ 지역 주민 및 관광객에게 영종의 유구한 역사를 알리고 지역 유일의 역사 ․문화 기관으로서의 역할 수행 및 문화향유의 기회 제공

관련사진

○ 위 치 도

○ 현장사진

2

차이나타운 보행환경개선사업

차이나타운 일원의 보행환경개선사업을 추진하여 북성동 차이나타운 및 동화마을을 방문하는 관광객에게 안전하고 쾌적한 보행환경을 제공하고자 함

사업개요

○ 사업기간 : 2017. 1월 ~ 2018. 3월

○ 위    치 : 북성동 차이나타운 ~ 동화마을 일원

○ 규    모

- 보·차도 정비 등 L=1,280m, B=10~12m

○ 총사업비 : 1,700백만원

○ 사업내용

- 인도 ․ 차도 정비, CCTV 설치 및 야간경관 정비 등

- 차이나타운 일원 일방통행, 회전교차로 및 인도 설치를 통한 보행환경 개선

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분 재원별	총사업비	2015년 이전	2016년	2017년	비 고
계	1,700	-	-	1,700	-
국고보조금	700	-	-	700	-
시비보조금	700	-	-	700	-
자체재원	300	-	-	300	-
지방채	-	-	-	-	-

추진실적

○ 2016.  10월 : 2017년 보행환경 개선사업 선정 (국민안전처)

○ 2017. 2. 15 : 실시설계용역 완료

○ 2017. 3.  7 : 토목 및 전기공사 착공

○ 2017. 3. 27 : 통신공사 착공

○ 2017. 5. 11 : 회전교차로 설치공사 착공

○ 2017. 6. 30 : 통신공사 준공

○ 2017. 7. 24 : 토목 및 전기공사 준공

○ 2017. 12. 19 : 회전교차로 설치공사 준공

○ 2017. 12. 20 : 경관조명공사 착공

○ 2018.  3.  9 : 경관조명공사 준공

기대효과

○ 차이나타운을 찾는 관광객 및 주민들에게 안전하고 쾌적한 보행환경 제공

관련사진

○ 위 치 도

○ 현장사진

3

신포국제시장 일원 기반시설 정비공사

신포국제시장 일원 기반시설 정비로 쾌적한 가로환경을 조성함으로서 관광객 유입을 통한 지역경제 및 관광 활성화에 기여

사업개요

○ 사업기간 : 2016. 12월 ~ 2017. 9월

○ 위    치 : 개항로 일원 (신포게이트 ~ 금강제화 일원)

○ 규    모

- 보도 정비 및 도로 재포장, 하수관 정비, 가로등 정비 등

○ 총사업비 : 1,100백만원

○ 사업내용

- 보도정비 및 확장 L=290m, B=3m

- 아스팔트 재포장 공사 A=5,143㎡

- 경관가로등 설치 14개소, 배선 및 배선 교체 411m 등

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분 재원별	총사업비	2015년 이전	2016년	2017년	비 고
계	1,100	-	-	1,100	-
국고보조금	500	-	-	500	-
시비보조금	600	-	-	600	-
자체재원	-	-	-	-	-
지방채	-	-	-	-	-

추진실적

○ 2016. 10. 17 ~ 27 : 사업설명회 (1차, 2차)

○ 2016. 10. 28 : 실시설계용역 완료

○ 2016. 11. 22 : 전기공사 착공

○ 2016. 12.  9 : 토목공사 착공

○ 2017.  6.  5 : 토목 및 전기공사 준공

기대효과

○ 월미관광특구 내 신포권역의 노후된 가로환경 개선 및 특색있는 거리 조성

○ 신포권역 관광개발사업과 신포 문화의 거리 도로정비사업의 연계를 통한

시너지 효과

관련사진

○ 위 치 도

○ 현장사진

4

사동삼거리 일원 인도정비공사

수인선 개통과 관련하여 사동삼거리 신포역 주변 정비가 미완료된 노후 인도를 정비하여 안전하고 쾌적한 보행환경을 조성하고자 함

사업개요

○ 사업기간 : 2017. 2월 ~ 5월

○ 위    치 : 사동삼거리 인천우체국~ 인천여상 일원

○ 규    모

- 인도정비 L=700m, B=5m

○ 총사업비 : 374백만원

○ 사업내용

- 콘크리트 블록 포장 A=3,102㎡

- 경계석 설치 L=981m 등

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분 재원별	총사업비	2015년 이전	2016년	2017년	2017년 이후
계	374	-	-	374	-
국고보조금	-	-	-	-	-
시비보조금	-	-	-	-	-
자체재원	374	-	-	374	-
지방채	-	-	-	-	-

추진실적

○ 2017. 2.  8 : 공사 착공

○ 2017. 4. 24 : 공사 준공

기대효과

○ 노후 보도정비로 안전하고 쾌적한 보행환경 조성

관련사진

○ 위 치 도

○ 현장사진

5

신흥동 하나님의 교회 일원 인도정비공사

신흥동 하나님의 교회 일원의 노후인도를 정비하여 안전하고 쾌적한 보행환경을 조성하고자 함

사업개요

○ 사업기간 : 2017. 2월 ~ 5월

○ 위    치 : 신흥동 하나님의 교회 일원

○ 규    모

- 인도정비 L=500m, B=4m

○ 총사업비 : 247백만원

○ 사업내용

- 콘크리트 블록 포장 A=2,230㎡

- 경계석 설치 L=1,261m 등

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분 재원별	총사업비	2015년 이전	2016년	2017년	2017년 이후
계	247	-	-	247	-
국고보조금	-	-	-	-	-
시비보조금	-	-	-	-	-
자체재원	247	-	-	247	-
지방채	-	-		-	-

추진실적

○ 2017. 2.  7 : 공사 착공

○ 2017. 4. 24 : 공사 준공

기대효과

○ 노후보도 정비를 통한 안전하고 쾌적한 보행환경 조성

관련사진

○ 위 치 도

○ 현장사진

6

연안동 일원 경관조명설치 공사

관광지로서의 이미지 제고와 특색있는 환경조성으로 관광 및 지역경제를 활성화 시키고자 함

사업개요

○ 사업기간 : 2017. 5월 ~ 11월

○ 위    치 : 중구 라이프비치맨션 아파트 ~ 맘모스 회센터

○ 규    모 : 가로경관조명 48개 설치 등 전기공사 1식

○ 총사업비 : 275백만원

○ 사업내용 : 가로경관조명 48개소

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분 재원별	총사업비	2015년 이전	2016년	2017년	2017년 이후
계	275	-	-	275	-
국고보조금	-	-	-	-	-
시비보조금	-	-	-	-	-
자체재원	275	-	-	275	-
지방채	-	-	-	-	-

추진실적

○ 2017.  5. 11 : 공사 착공 (1차)

○ 2017.  6.  7 : 준공계 접수

○ 2017.  8. 30 : 공사 착공 (2차)

○ 2017. 11.  7 : 준공계 접수

기대효과

○ 관광객에게 볼거리 제공 및 밝은 분위기 조성으로 상권 활성화

○ 밝은 가로등으로 교체를 통해 보행 환경의 개선

관련사진

○ 위 치 도

○ 현장사진

7

연안부두 여객터미널 일원 노후하수관 정비공사

연안부두 여객터미널 일원의 노후관에 대하여 합리적인 정비방안을 수립하여 원활한 하수 흐름과 관로 수밀성 확보를 통해 토양오염을 방지하고, 도로침하 등을 사전에 방지하여 하수관로 유지관리에 만전을 기하고자 함

사업개요

○ 사업기간 : 2017. 4월 ~ 7월

○ 위    치 : 연안여객터미널 (연안부두로 70) 일원

○ 규    모 : 노후 하수관 정비 (L=605m)

○ 총사업비 : 1,300,000천원 (재난안전특별교부세)

○ 사업내용 : 전체보수 (D1650mm구간, L=424m), (D1200mm구간, L=227m)

단면보수 13㎡

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분 재원별	총사업비	2015년 이전	2016년	2017년	2017년 이후
계	1,300	-	-	1,300	-
국고보조금	-	-	-	-	-
시비보조금	-	-	-	-	-
자체재원	1,300	-	-	1,300	-
지방채	-	-	-	-	-

추진실적

○ 2017. 4. 12 : 연안부두 여객터미널 일원 노후하수관정비공사 착공

○ 2017. 7. 10 : 연안부두 여객터미널 일원 노후하수관정비공사 준공

기대효과

○ 집중강우 시 원활한 하수흐름 도모

○ 하수구조물 보강을 통해 도로침하 및 안전사고 예방

관련사진

○ 위 치 도

○ 현장사진

8

만국 야생화정원 조성사업

관내 주요 관광지인 송월동 동화마을과 월미도를 잇는 관광녹지축을 조성하여 관광활성화에 기여하고자 함.

사업개요

○ 사업기간 : 2017. 5. 2. ~ 2017. 6. 30.

○ 위    치 : 부두 우선개방구역 수림대(북성동 4-322 외 2필지) 외 1개소

○ 규    모 : 730㎡

○ 총사업비 : 251백만원

○ 사업내용 : 야생화 22,760본, 철쭉 3,830주, 무궁화 3,630주 식재

목교 3개소, 종합안내판 2개, 조형물 등 시설물 설치

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분 재원별	총사업비	2015년 이전	2016년	2017년	2017년 이후
계	251	-	-	251	-
국고보조금	100	-	-	100	-
시비보조금	-	-	-	-	-
자체재원	151	-	-	151	-
지방채	-	-	-	-	-

추진실적

○ 2017. 1월 ~ 3월 : 설계용역 시행 및 관계기관 협의

○ 2017. 3. 30. : 일상감사 및 계약심사

○ 2017. 4. 27. : 공사 계약

○ 2017. 5.  2. : 공사 착공

○ 2017. 6. 30. : 공사 준공

기대효과

○ 가로경관 개선 및 녹색 휴식공간 제공

○ 관광녹지축 조성을 통한 관광활성화 기여

관련사진

○ 위 치 도

월미로

무궁화 식재

8부두 개방구역 수림대

야생화 및 관목 식재

○ 현장사진

9

소하천(동강천 1단계-1구간) 정비공사

「소하천정비법」제8조에 따라 ‘동강천 1-1구간 정비공사’를 추진하여 치수 안전성을 확보하고, 안전한 주거환경을 조성하고자 함

사업개요

○ 사업기간 : 2016. 4월 ~ 2017. 8월

○ 위    치 : 운북동 1241-2 ~ 운남동 1492번지 일원

○ 규    모 : 동강천 1-1구간 정비 L=520m

○ 총사업비 : 1,943백만원

○ 사업내용 : 호안공-식생축조블럭 A=2,360㎡, 교량공-잔다리2교(SPC BOX) 12.0X2.87

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분 재원별	총사업비	2015년 이전	2016년	2017년	2017년 이후
계	1,943	-	-	1,943	-
국고보조금	-	-	-	-	-
시비보조금	-	-	-	-	-
자체재원	1,943	-	-	1,943	-
지방채	-	-	-	-	-

추진실적

○ 2014. 12. 22 : 동강천 정비(1단계) 시행계획 공고

○ 2015.  1. 15 : 동강천 정비사업(1단계) 실시설계 용역 준공

○ 2016.  4.  5 : 동강천 정비사업(1단계) 세부추진계획 수립

※ 도로공사와 연계한 동강천 1-1구간 우선 시행

○ 2016.  5.  2 : 동강천 정비사업(1-1구간) 보상계획 공고

○ 2016.  7. 18 : 동강천 정비(1단계) 시행계획 변경 공고

○ 2016. 11.  1 : 공사 착공

○ 2017.  8. 31 : 공사 준공

기대효과

○ 동강천 통수단면 확대 및 제방 정비를 통한 주변 농경지 및 가옥 침수피해 예방

관련사진

○ 위 치 도

2단계 L=1,335m

1단계 L=1,866m

1-1구간 L=520m L=545m

○ 현장사진

시행전	시행후

10

영종도 하수도 폐기물 적환장 설치공사

영종도 내 필수시설인 하수도 폐기물 적환장을 설치하여 도로 및 하수시설물 관리를 위한 자재창고, 임시 야적장으로 활용하고자 함

사업개요

○ 사업기간 : 2016. 10월 ~ 2017. 4월

○ 위    치 : 운북동 933-94번지 일원

○ 규    모 : 적환장 설치(A=4,484㎡)

○ 총사업비 : 300,000천원

○ 사업내용 : 자재창고 및 하수도 적환장 설치

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분 재원별	총사업비	2015년 이전	2016년	2017년	2017년 이후
계	-	-	-	-	-
국고보조금	-	-	-	-	-
시비보조금	150	-	-	150	-
자체재원	150	-	-	150	-
지방채	-	-	-	-	-

추진실적

○ 2016.  8.  3 : 실시설계용역 착수

○ 2016.  8. 30 : 실시설계용역 준공

○ 2016. 10. 19 : 공사 착공

○ 2017.  4. 29 : 공사 준공

기대효과

○ 하수 폐기물 적환장을 신설하여 하수도 유지관리 증진을 통한 지역주민 삶의 질 개선

관련사진

○ 위 치 도

예단포선착장

수악끝산

농림축산검역본부

검역탐지견센터

운북동 933-94

적환장 설치 장소

(A= 4,484㎡)

○ 현장사진

11

가족형 생태물놀이장 조성사업

공원 내 테마형 물놀이장 관련 수요 급증에 따라 영종 지역주민을 위한 휴양 시설을 마련

사업개요

○ 사업기간 : 2017. 4월 ~ 7월

○ 위    치 : 운남근린공원 내(운남동 1551번지 일원)

○ 규    모 : 약 920㎡

○ 총사업비 : 900,000천원(시비 450,000천원 구비 450,000천원)

○ 사업내용

- 계류형 물놀이장 2개소(어린이용, 유아용), 조합놀이대 1개소, 휴게데크 등

- 세면장 및 화장실, 지하수(관정) 설치, 방음수림 및 휴게녹지 공간 구성

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분 재원별	총사업비	2015년 이전	2016년	2017년	2017년 이후
계	900	-	-	900	-
국고보조금	-	-	-	-	-
시비보조금	450	-	-	450	-
자체재원	450	-	-	450	-
지방채	-	-	-	-	-

추진실적

○ 2016.  8월  : 사업계획 수립

○ 2016. 12월  : 시 사업예산 확정

○ 2017.  1월  : 실시설계용역 착수

○ 2017. 3. 22  : 제1회 추경 구비 확보

○ 2017. 4. 24  : 공사 착공

○ 2017. 7. 11  : 공사 준공

○ 2017. 7. 13  : 물놀이장 개장식

○ 2017. 8. 20  : 물놀이장 폐장

기대효과

○ 영종지역 내 물놀이 공간 조성하여 부족한 가족휴양시설 확충

관련사진

○ 위 치 도

○ 현장사진

12

선녀바위 쉼터 및 화장실 설치 사업

선녀바위가 있는 해변에 전망대, 데크, 화장실 등 편의시설 설치로 이용자의 편의를 도모하고자 함.

사업개요

○ 사업기간 : 2017. 2월 ~ 12월

○ 위    치 : 을왕동 707-4,5

○ 규    모 : 화장실 123㎡, 샤워장 55㎡

○ 총사업비 : 920,964천원(구비)

○ 사업내용

- 화장실(남자10, 여자10) 및 샤워장(샤워기 남자15, 여자15)

- 전망대(3층, 높이 11.3m)

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분 재원별	총사업비	2015년 이전	2016년	2017년	2017년 이후
계	921	-	-	921	-
국고보조금	-	-	-	-	-
시비보조금	-	-	-	-	-
자체재원	921	-	-	921	-
지방채	-	-	-	-	-

추진실적

○ 2017. 6월 : 설계용역 완료

○ 2017. 7월 : 계약심사, 일상감사 의뢰

○ 2017. 9월 : 공사착공

○ 2017. 12. 16 : 공사 준공

기대효과

○ 선녀바위 해수욕장 편의시설 확충에 따른 관광객 이용편의 증대

관련사진

○ 위 치 도

○ 현장사진